구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 가축방역담당 (담당자 진현우, 7844)
	2-11
추진실적	5%(장기 추진) (2025. 1월 기준)		완료예상	2027년 12월
			목표달성여부	여

함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2024. ~ 2027년

❍ 위       치: 산청군 일원

❍ 총 소요예산: 25,219백만원(국비 12,600, 도비 2,520, 군비 2,539, 융자 5,040, 자담 2,520)

❍ 사 업 내 용: 300톤/일 규모 가축분뇨 공동자원화(에너지화, 퇴액비화, 정화)시설 건

□ 주요 추진사항

❍ 가축분뇨 공동자원화시설 지원 공모사업 신청 관련 협의	: 2022. 10월

❍ 경상남도 공동자원화시설 담당사무관 및 담당자 사업관련 협의	: 2023.  2월

❍ 함양산청축협퇴비유통센터 관계자 업무 협의	: 2023.  4월

❍ 경기도 이천 공동자원화시설 견학(경남도, 군, 축협)	: 2023.  4월

- 해당지역은 대단위 축사 설치 지역으로 축분처리를 위하여

공동자원화시설 설치시 지역주민 적극 찬성함

❍ 사업대상지 물색	: 2023.  4월

❍ 타당성 조사 용역 시행	: 2024.  5월

❍ 창녕군 영산면 공동자원화시설 견학(군수 외 4명): 2024. 5월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
25,200	25,219	15,219	19	-	-	19	-	19	-	-	19	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	25,219	-	-	-	19	5,200	10,000	10,000
국비	12,600	-	-	-	-	2,600	5,000	5,000
도비	2,520	-	-	-	-	520	1,000	1,000
군비	2,519	-	-	-	19	500	1,000	1,000
기타	7,580	-	-	-	-	1,580	3,000	3,000

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
함양산청 축협 축분퇴비유통센터 이전	소계	19	19	-	-	-	-	19	19	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	19	19	-	-	-	-	19	19	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 이전 타당성 용역 결과 사업비 252억에서 345억으로 증가할 것으로 예상

❍ 축분퇴비유통센터 이전 사업부지 확보 애로

❍ 공모사업 신청시 부지 및 인근마을 주민 동의 절차 이행 필요

□ 향후 추진계획

❍ 축산농가 교육, 사업부지 확보 및 주민동의 절차 이행	: 2025. 8월

❍ 사업신청	: 2026. 3월

❍ 사업시행 및 완료	: 2026. ~ 2027년

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 가축방역담당 (담당자 박수헌, 7844)
	2-11
추진실적 (기준일)	5%(장기 추진) (2024. 8. 28. 기준)		완료예상	2027년 12월
			목표달성여부	여

함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전(변경)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022 ~ 2027년

❍ 위       치: 산청군 일원

❍ 총 소요예산: 25,219백만원(국비12,600, 도비25,20, 군비2,539, 융자75,60)

❍ 사 업 내 용: 300톤/일 규모 가축분뇨 공동자원화(에너지화, 퇴액비화 정화)
시설 신규 건립

□ 주요 추진사항

❍ 가축분뇨 공동자원화시설 지원 공모사업 신청 관련 협의	: 2022. 10월

❍ 경상남도 공동자원화시설 담당사무관 및 담당자 사업관련 협의	: 2023. 2월

❍ 함양산청축협퇴비유통센터 관계자 업무 협의	: 2023. 4월

❍ 경기도 이천 공동자원화시설 견학(경남도, 군, 축협)	: 2023. 4월

- 해당지역은 대단위 축사 설치 지역으로 축분처리를 위하여

공동자원화시설 설치시 지역주민 적극 찬성함

❍ 사업대상지 물색	: 2023. 4월

❍ 타당성 조사 용역 시행	: 2024. 1월~5월

❍ 창녕군 영산면 공동자원화시설 견학(군수 외 4명)             : 2024. 5월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
25,200	25,219	25,219	19	-	-	19	-	19	-	-	19	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액			임기 내 투자 계획			임기 후
		21년 까지	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	25,219	-	-	-	19	5,200	10,000	10,000
국비	12,600	-	-	-	-	2,600	5,000	5,000
도비	2,520	-	-	-	-	520	1,000	1,000
군비	2,519	-	-	-	19	500	1,000	1,000
기타	7,580	-	-	-	-	1,560	3,000	3,000

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
함양산청 축협 축분퇴비유통센터 이전	소계	19	-	-	-	-	-	19	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	19	-	-	-	-	-	19	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 이전 타당성 용역 결과 사업비 252억에서 345억으로 증가할 것으로 예상

❍ 축분퇴비유통센터 이전 사업부지 확보 애로

❍ 공모사업 신청시 부지 및 인근마을 주민 동의 절차 이행 필요

□ 향후 추진계획

❍ 축산농가 교육, 사업부지 확보 및 주민동의 절차 이행     : 2025. 02월

❍ 사업신청                                              : 2025. 03월

❍ 사업시행 및 완료                                      : 2025. ~ 2027년

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 가축방역담당 (담당자 박수헌, 7844)
	2-11
추진실적 (기준일)	5%(장기 추진) (2024. 6월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022 ~ 2026년

❍ 위       치: 산청군 일원

❍ 총 소요예산: 25,200백만원(국비 12,600, 도비 2,520, 군비 2,520, 융자 5,040, 자담 2,520)

❍ 사 업 내 용: 300톤/일 규모 가축분뇨 공동자원화(에너지화, 퇴액비화, 정화)시설 건립

□ 주요 추진사항

❍ 가축분뇨 공동자원화시설 지원 공모사업 신청 관련 협의	: 2022. 10월

❍ 경상남도 공동자원화시설 담당사무관 및 담당자 사업관련 협의	: 2023. 2월

❍ 함양산청축협퇴비유통센터 관계자 업무 협의	: 2023. 4월

❍ 경기도 이천 공동자원화시설 견학(경남도, 군, 축협)	: 2023. 4월

- 해당지역은 대단위 축사 설치 지역으로 축분처리를 위하여

공동자원화시설 설치시 지역주민 적극 찬성함

❍ 사업대상지 물색	: 2023. 4월

❍ 타당성 조사 용역 시행	: 2024. 1월~5월

❍ 창녕군 영산면 공동자원화시설 견학(군수 외 4명)             : 2024. 5월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
25,200	25,200	25,200	19	-	-	19	-	19	-	-	19	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	25,200	-	-	-	25,200	-	-	-
국비	12,600	-	-	-	12,600	-	-	-
도비	2,520	-	-	-	2,520	-	-	-
군비	2,520	-	-	-	2,520	-	-	-
융자	5,040	-	-	-	5,040	-	-	-
기타(자부담)	2,520	-	-	-	2,520	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
함양산청 축협 축분퇴비유통센터 이전	소계	19	-	-	-	-	-	19	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	19	-	-	-	-	-	19	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 사업부지 선정 및 주민동의 절차 이행 애로

- 이전 타당성 조사 용역 결과를 바탕으로 추진방향 결정

□ 향후 추진계획

❍ 사업부지 확보 및 주민동의 절차 이행             : 2024. 12월

❍ 가축분뇨 공동자원화사업 신청                    : 2026. 3월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 가축방역담당 (담당자 박수헌, 7844)
	2-11
추진실적	5% (장기 추진)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022 ~ 2026년

❍ 위       치: 산청군 일원

❍ 총 소요예산: 25,200백만원(국비 12,600, 도비 2,520, 군비 2,520, 융자 5,040, 자담 2,520)

❍ 사 업 내 용: 300톤/일 규모 가축분뇨 공동자원화(에너지화, 퇴액비화, 정화)시설 건립

□ 주요 추진사항

❍ 가축분뇨 공동자원화시설 지원 공모사업 신청 관련 협의	: 2022. 10월

❍ 경상남도 공동자원화시설 담당사무관 및 담당자 사업관련 협의	: 2023. 2월

❍ 함양산청축협퇴비유통센터 관계자 업무 협의	: 2023. 4월

❍ 경기도 이천 공동자원화시설 견학(경남도, 군, 축협)	: 2023. 4월

- 해당지역은 대단위 축사 설치 지역으로 축분처리를 위하여

공동자원화시설 설치시 지역주민 적극 찬성함

❍ 사업대상지 물색	: 2023. 4월

❍ 타당성 조사 용역 시행	: 2024. 1월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
25,200	25,200	25,200	19	-	-	19	-	19	-	-	19	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	25,200	-	-	-	25,200	-	-	-
국비	12,600	-	-	-	12,600	-	-	-
도비	2,520	-	-	-	2,520	-	-	-
군비	2,520	-	-	-	2,520	-	-	-
융자	5,040	-	-	-	5,040	-	-	-
기타(자부담)	2,520	-	-	-	2,520	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
함양산청 축협 축분퇴비유통센터 이전	소계	19	-	-	-	-	-	19	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	19	-	-	-	-	-	19	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 사업부지 선정 및 주민동의 절차 이행 애로

- 이전 타당성 조사 용역 결과를 바탕으로 추진방향 결정

□ 향후 추진계획

❍ 사업부지 확보 및 주민동의 절차 이행             : 2024. 12월

❍ 가축분뇨 공동자원화사업 신청                    : 2025. 3월

❍ 사업시행 및 완료                                : 2025 ~ 2026년

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	농축산과 가축방역담당 (담당자 백종수)
	2-11
추진실적	5% (정상추진)		완료예상	2026년 6월
			목표달성여부	여

함양산청축협 축분퇴비유통센터 이전

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 소요예산 : 25,200백만원

❍ 사업내용 : 300톤/일 규모 가축분뇨 공동자원화(에너지화, 퇴액비화, 정화)시설 이전

□ 추진사항

❍ 가축분뇨 공동자원화시설 지원 공모사업 신청 관련 협의     : 2022. 10월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	25,200				25,200
국비	12,600				12,600
도비	2,520				2,520
군비	2,520				2,520
기타	7,560				7,560

□ 문제점 및 대책

❍ 사업부지 선정 및 주민동의 절차 이행 애로

- 공동협의체 구성하여 후보지를 3 ~ 4개소 선정 후 지역주민 동의 추진

- 지역주민과 공동운영 및 숙원사업 지원 등 제시

□ 향후 추진계획

❍ 사업부지 확보 및 주민동의 절차 이행               : 2024. 2월

❍ 사업신청                                          : 2024. 3월

❍ 사업시행 및 완료                                  : 2025 ~ 2026년