구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 문화예술담당 (담당자 강지훈, 6403)
	3-3
추진실적 (기준일)	25%(정상추진) (2025. 1월 기준)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

산청군 행복문화센터 건립

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 10. ~ 2025. 12월

- 변    경: 2022. 10. ~ 2026. 12월

- 변경사유: 설계공모 및 기타 사전행정절차 지연에 따른 사업기간 변경(연장)

❍ 위       치: 산청군 산청읍 지리 327-4번지 일원

❍ 총 소요예산: 6,400백만원(국비(특교세) 900, 도비 3,000, 군비 2,500)

❍ 사 업 내 용: 행복문화센터 1동 건립(지상 3층, 건축연면적 1,226㎡ 정도)

□ 주요 추진사항

❍ 공유재산 심의 및 관리계획 승인	: 2022. 10. ~ 12월

❍ 산청군 중기지방재정계획 반영 및 지방재정 투자심사	: 2022. 12. ~ 2023. 2월

❍ 건축 기획용역 및 공공건축지원센터 사업계획 사전검토 실시	: 2023.  3. ~ 7월

❍ 3단계 경상남도 지역균형발전사업 선정	: 2023.  7월

❍ 공유재산관리계획 변경 승인	: 2023. 10월

❍ 도 공공건축지원센터 사업계획 재심사	: 2024.  1. ~ 2월

❍ 2025년 지방소멸대응기금 공모사업 신청	: 2024.  2월

❍ (군)공공건축심의윈원회 심의	: 2024.  5월

❍ 공공용 건물 설계공모관리용역 실시	: 2024.  6. ~ 8월

❍ 건축 설계공모 실시	: 2024. 11. ~ 2025. 1월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
6,000	6,400	6,400	3,300	900	1,000	1,400	-	3,300	900	1,000	1,400	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	6,400	-	-	-	400	6,000	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-
군비	3,400	-	-	-	400	3,000	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024		2025
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청군 행복문화센터 건립	소계	3,300	20	-	-	-	-	400	20	2,900	-
	국비	900	-	-	-	-	-	-	-	900	-
	도비	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-
	군비	1,400	20	-	-	-	-	400	20	1,000	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2024. 12월 특별교부세 확보에 따라 2025년 제1회 추가경정 예산시 특별교부세 900백만원 편성 예정

□ 문제점 및 대책

❍ 2025년 3단계 경상남도 지역균형발전사업 확정예산 3,000백만원 중
1,000백만원만 확보

⇒ 착공시 차수별 발주 실시 및 기타 재원 확보 방안 마련

□ 향후 추진계획

❍ 설계공모 심사 개최	: 2025. 1. 15.

❍ 실시설계 용역 시행	: 2025. 2. ~ 7월

❍ 경상남도 2단계 조건부 지방재정투자 심사 실시	: 2025. 7월

❍ 공사 착공 및 준공	: 2025. 9. ~ 2026. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 문화예술담당 (담당자 강지훈, 6402)
	3-3
추진실적 (기준일)	25%(정상추진) (2024. 8. 28. 기준)		완료예상	2025년 12월
			목표달성여부	여

산청군 행복문화센터 건립(변경)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 10. ~ 2025. 12월

❍ 위       치: 산청군 산청읍 지리 327-4번지 일원

❍ 총 소요예산: 6,400백만원(도비 3,000, 군비 3,400)

❍ 사 업 내 용: 행복문화센터 건립(지상 3층, 건축연면적 1,236㎡)

□ 주요 추진사항

❍ 공유재산 심의 및 관리계획 승인	: 2022. 10. ~ 12월

❍ 산청군 중기지방재정계획 반영 및 지방재정 투자심사	: 2022. 12. ~ 2023. 2월

❍ 건축 기획용역 및 공공건축지원센터 사업계획 사전검토 실시	: 2023.  3. ~ 7월

❍ 3단계 경상남도 지역균형발전사업 선정	: 2023.  7월

❍ 공유재산관리계획 변경 승인	: 2023. 10월

❍ 경상남도 공공건축지원센터 사업계획 사전검토	: 2024.  2월

❍ 산청군 공공축심의위원회 심의	: 2024.  5월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
6,000	6,400	6,400	400	-	-	400	-	400	-	400	-	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액			임기 내 투자 계획			임기 후
		21년 까지	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	6,400	-	-	-	400	6,000	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-
군비	3,400	-	-	-	400	3,000	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청군 행복문화센터 건립	소계	400	20	-	-	-	-	400	20
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	400	20	-	-	-	-	400	20
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 2025년 지역균형발전사업비 3,000백만원 전액 미교부시 예산 부족으로 차수공사 발주로 사업완료기간 지연 예상

→ 특별조정교부금 신청을 통해 재원 확보 노력

□ 향후 추진계획

❍ 산청 행복문화센터 건립사업 설계공모 실시 : 2024. 10월

❍ 실시설계 시행                            : 2024. 11월

❍ 경상남도 2단계 조건부 지방재정 투자심사  : 2025. 3월

❍ 공사 착공 및 준공                        : 2025. 3. ~ 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 문화예술담당 (담당자 임승혜, 6402)
	3-3
추진실적 (기준일)	20%(정상추진) (2024. 6월 기준)		완료예상	2025년 12월
			목표달성여부	여

산청군 행복문화센터 건립

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 10. ~ 2024. 12월

- 변경: 2022. 10. ~ 2025. 12월

- 변경사유: 부지변경(민간부지 보상 협의가 안됨)으로 인한 사전 행정절차 재이행 기간 소요

❍ 위       치: 산청군 산청읍 지리 327-4번지 일원

❍ 총 소요예산: 6,000백만원(도비 1,800, 군비 4,200)

❍ 사 업 내 용: 행복문화센터 건립(지상 3층, 건축연면적 1,226㎡)

□ 주요 추진사항

❍ 공유재산 심의 및 관리계획 승인	: 2022. 10. ~ 12월

❍ 산청군 중기지방재정계획 반영 및 지방재정 투자심사	: 2022. 12. ~ 2023. 2월

❍ 건축 기획용역 및 공공건축지원센터 사업계획 사전검토 실시	: 2023.  3. ~ 7월

❍ 3단계 경상남도 지역균형발전사업 선정	: 2023.  7월

❍ 공유재산관리계획 변경 승인	: 2023. 10월

❍ 도 공공건축지원센터 사업계획 재심사	: 2024.  1. ~ 2월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
6,000	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	6,000	-	-	1,500	4,500	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,800	-	-	-	1,800	-	-	-
군비	4,200	-	-	1,500	2,700	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청군 행복문화센터 건립	합계	-	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 당초 2024년 지방전환(이양)사업(도 문화예술과)으로 예산을 신청할 예정이었으나 지방비 부담 비율(3:7)이 높아서 지방비 부담 비율이 상대적으로 낮은 3단계 지역균형발전사업(도 균형발전단)으로 신청함.

❍ 2023년 7월 3단계 지역균형발전사업(도 균형발전단)이 확정되었으나 도 균형발전단에서는 특별회계 예산편성 범위 내에서 시군 선사업 집행률 점검 등을 통하여 순차적으로 예산을 지원한다고 하여 건축물 건립 시 준공 시기 지연 등 사업추진에 어려움이 있음.

⇒ 2025년 지방소멸대응기금 공모사업에 신청하여 사업 추진하고자 함.

(전략사업담당관-608호(2024. 1. 23.)와 관련)

□ 향후 추진계획

❍ 2025년 지방소멸대응기금 공모사업 신청 예정           : 2024. 2월

❍ (군)공공건축심의윈원회 심의                           : 2024. 3월

❍ 실시설계 용역비 확보(제1차 추경)                      : 2024. 5월

❍ 공공용 건물 설계공모 용역 실시                       : 2024. 6. ~ 8월

❍ 실시설계 용역 시행                                   : 2024. 9월

❍ 공사 착공 및 준공                                    : 2025. 3. ~ 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 문화예술담당 (담당자 민선아)
	3-3
추진실적	10% (정상추진)		완료예상	2024년 12월
			목표달성여부	여

산청군 행복문화센터 건립

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022. 10. ~ 2024. 12월

❍ 위    치: 산청군 산청읍 지리 327-4번지 일원

❍ 소요예산: 60억원(도비 20, 군비 40)

* 2024년 지방전환(이양)사업 예산신청(20억) 예정

❍ 사업내용: 행복문화센터 건립(지상 3층, 건축연면적 1,188㎡)

층별	세부시설 설치계획	비고
지상 3층	공연장, 강의실 등(396㎡)
지상 2층	공연장, 공연 준비실, 무대장비 조작실 등(396㎡)
지상 1층	상설 전시실, 강의실 등(396㎡)

□ 추진사항

❍ 공유재산 심의 및 관리계획 승인                 : 2022. 10. ~ 12월

❍ 지방재정투자심사                               : 2023. 2월

❍ 사업부지매입                                   : 2023. 5월

❍ 지방전환사업(1단계) 신청                       : 2023. 8월

❍ 산청문화원 별관 철거                           : 2023. 12월

❍ 문화센터 착공 및 준공                          : 2024. 1. ~ 12월

□ 연차별 사업예산

(단위: 백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	6,000		600	5,400
국비
도비	2,000			2,000
군비	4,000		600	3,400
기타

□ 향후 추진계획

❍ 2023년 2월 투자심사 통과 후 군비 확보 신청

❍ 2024년 지방전환(이양)사업 예산신청(20억)