04

콘텐츠의 다양화 및 차별화로

찾고싶은 관광산청 구현

26. 2026년 산청한방약초축제 개최

27. 산청 동의보감 문화플랫폼 구축

28. 생초 축구센터 건립사업

29. 생초 공공파크골프장 조성사업

30. 오부 가마실 축구장 조성사업

31. 반다비 체육센터 건립사업

32. 주민주도형 관광활성화 지원사업

33. 웰니스 광역 시티투어 운영

34. 관광캐릭터 「산 너머 친구들」 굿즈샵 운영

35. 남사예담촌 인프라 구축사업

36. 백두대간 V-힐링 스타트업로드 조성사업

37. 밤머리재 전망대 관광경관 명소화 사업

38. 백두대간 생태축 복원사업

39. 창촌 국민여가캠핑장 조성사업

26. 2026년 산청한방약초축제 개최

❖ 한방의료 및 자생약초 보유지역 강점을 활용한 축제 콘텐츠의 차별화 및 글로벌화 축제 육성

❖ 다양한 수익사업 창출로 경제성을 갖춘 자립형․산업형 축제로 전환

□ 추진방향

❍ 항노화 테마를 기반으로한 신규 컨텐츠 발굴하여 차별화된 축제 기획

❍ 관광과 한방항노화산업을 연계한 산업형 축제로서의 성장기반을 마련

□ 사업개요

❍ 위    치: 산청군 금서면 특리 1300-40번지 동의보감촌 일원

❍ 기    간: 2026. 10. 2. ~ 10. 11.(10일간)

❍ 시행방법: (재)산청축제관광재단 위탁

❍ 사 업 비: 2,040백만원(도비 15, 군비 2,025)

❍ 사업내용: 개막‧제전행사, 전시‧체험‧경연‧판매행사, 문화예술공연 등

□ 그간 추진사항

❍ 산청군-(재)산청축제관광재단 업무대행 계약체결 : 2026. 1월

□ 추진계획

❍ 축제 기본계획 수립 및 자문위원회 개최 : 2026. 3월

❍ 축제 실행계획 확정 및 행사장 기반조성 : 2026. 9월

❍ 축제 온․오프라인 홍보 시행             : 2026. 9월

❍ 축제 개최	: 2026. 10. 2 ~ 10. 12.

□ 기대효과

❍ 지역산업과 축제와의 연계 강화로 지역경제 활성화

❍ 한방항노화와 관광이 어우러진 대한민국 대표 힐링축제로 도약

27. 산청 동의보감 문화플랫폼 구축

❖ 동의보감촌 내 주요시설과 연계한 가족체험시설 확충으로 다양한      연령층이 함께 즐기고 체험하며 힐링할 수 있는 관광지 조성

※ 민선8기 도정과제 선정

□ 추진방향

❍	동의보감촌을 다양한 연령층이 함께 즐기고 체험하며 힐링할 수 있는 관광지로 발전시켜 관광객 유치 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

❍ 위    치: 금서면 특리 동의보감촌 일원

❍ 기    간: 2024 ~ 2026년

❍ 사 업 량: 동의보감 가족체험시설, 상설 야외공연장, 박물관 영상실 리모델링

❍ 사 업 비

(단위: 백만원)

재원별

총 사업비

2024년

2025년

2026년

비 고

계

4,700

500

1,650

2,550

전  환

2,200

240

725

1,235

도  비

479

60

97

322

군  비

2,021

200

828

993

❍ 사업내용

- 가족체험시설 및 상설야외공연장 설치

- 박물관 영상실 리모델링 및 영상 콘텐츠 2종 제작

□ 그간 추진사항

❍ 투자심사 완료                              : 2023. 8월

❍ 실시설계 용역                              : 2024. 1. ~ 12월

❍ 상설야외공연장 공사 착공 및 준공           : 2025. 3. ~  9월

❍ 박물관 영상실 리모델링 완료                : 2025. 9월

❍ 박물관 영상 콘텐츠 제작 시행               : 2025. 7월

□ 추진계획

❍ 가족체험시설 실시설계 용역 시행 및 완료    : 2026. 1. ~  3월

❍ 가족체험시설 공사 시행 및 준공             : 2026. 3. ~ 12월

❍ 박물관 영상 콘텐츠 제작 완료               : 2026. 7월

□ 기대효과

❍ 동의보감촌의 새로운 볼거리 제공을 통한 관광지 및 지역경제 활성화 기여

28. 생초 축구센터 건립사업

❖ 전국 단위 다양한 유형의 축구팀 전지훈련 유치를 위한 인프라 (축구장, 주차장, 다목적실 등) 조성으로 지역경제 활성화 도모

□ 추진방향

❍ 폐교를 활용, 인근 문화관광 콘텐츠와 연계한 차별화된 전지훈련 공간 조성

❍ 가족단위 스포츠 관광객부터 생활체육인까지 아우르는 주민친화형 스포츠 거점 육성

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2023. 7월 ~ 2027. 6월

❍ 위     치: 산청군 생초면 어서리 417-1 일원 (구, 생초중고등학교)

❍ 사업규모: 축구장·풋살장(10,314㎡), 관리동(395㎡), 관중석(455㎡),
주차장(4,700㎡)

❍ 사 업 비: 12,400백만원(기금 9,400, 군비 3,000)

❍ 사업내용: 축구 전지훈련 경기 및 관람을 위한 축구센터 조성

□ 그간 추진사항

❍ 생초축구센터 건립사업 추진계획 확정	: 2023. 7월

❍ 공유재산 관리계획 승인	: 2023. 9월

❍ 생초중학교(토지 및 지장물) 매입	: 2024. 5월

❍ 생초중·고등학교 철거 설계용역	: 2024. 7월

❍ 생초중·고등학교 철거 시행	: 2025. 5. ~ 10월

□ 추진계획

❍ 산청군관리계획(어서지구지구단위계획)결정(변경)	: 2026. 3월

❍ 실시설계 시행	: 2026. 3. ~ 5월

❍ 축구센터 공사 시행 및 준공	: 2026. 7. ~ 2027. 7월

□ 기대효과

❍ 산청축구 명성 홍보 및 군 이미지 제고로 지역경제 활성화 도모

❍ 주민친화형 체육시설 조성으로 삶의 질 향상 및 건강증진 기여

29. 생초 공공파크골프장 조성사업

❖ 남강(국가하천) 하천구역 고수부지에 생활밀착형 파크골프장을 조성하여 부족한 인프라 해결 및 체육복지 증진 도모

□ 추진방향

❍ 기존 하천부지를 활용한 저비용 파크골프장 조성으로 숙원사업 해결

❍ 여가선용 및 생활체육 수요에 대응한 체력증진을 위한 여건 개선

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2024 ~ 2026년

❍ 위    치: 생초면 신연리 768-3번지 일원

❍ 사 업 량: 파크골프장 조성(36홀) A=52,260㎡

❍ 사 업 비: 3,300백만원(도비전환 990, 군비 2,310)

❍ 사업내용: 파크골프장 조성 및 부대시설(화장실, 주차장 등) 설치

□ 그간 추진사항

❍ 하천기본계획(복원지구→친수지구) 변경 고시	: 2024. 12월

❍ 조사측량 및 실시설계용역 추진	: 2024.  8. ~ 12월

❍ 환경영향평가 협의 완료	: 2025. 3월

❍ 하천점용허가 협의 완료	: 2025. 3월

❍ 지방재정투자사업 심사(자체심사)	: 2025. 7월

□ 추진계획

❍ 공사착공	: 2026.  2월

❍ 공사준공	: 2026. 12월

□ 기대효과

❍ 급증하는 파크골프 수요를 적법한 절차에 따라 조성하여 제도권 내 관리 및 질서 유지

❍ 하천 내 친수공간에 부족한 인프라를 구축하여 생활체육 활성화에 기여

30. 오부 가마실 축구장 조성사업

❖ 오부 가마실 생활권 중심의 국제규격 축구장을 조성하여 전국대회 및 전지훈련팀을 인근 체육시설과 연계 유치로 지역경제 활성화 도모

□ 추진방향

❍ 기존 시설과의 연계, 다목적 기능의 체육공원(축구장) 조성 필요성 대두

❍ 공공체육시설 집약 설치로 전문·생활체육시설 간 연계성 강화 및 시너지 견인

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2023 ~ 2026년

❍ 위    치: 오부면 중촌리 469번지 일원

❍ 사 업 량: 축구장 조성 1식(A=19,795㎡)

❍ 사 업 비: 4,136백만원(도비 880, 군비 3,256)

❍ 사업내용: 축구장(국제규격), 배드민턴장, 체력단련장, 주차장

□ 그간 추진사항

❍ 기본구상 및 타당성조사 용역	: 2023. 6월

❍ 체육진흥시설 지원사업(지방전환사업) 신청	: 2024. 8월

❍ 산청군관리계획(체육공원) 결정	: 2024. 9월

❍ 공원 조성계획 및 소규모환경영향평가	: 2024. 9. ~ 12월

❍ 실시설계 용역 추진	: 2025. 3. ~ 11월

❍ 산청군관리계획(공원조성계획) 결정	: 2025. 8월

□ 추진계획

❍ 토지보상 협의	: 2025. 9. ~ 2026. 2월

❍ 공사 착공 및 준공	: 2026. 3. ~ 12월

.

□ 기대효과

❍ 스포츠 공간 확충 및 체육복지 위상 강화로 건강 증진 도모

❍ 각종 대회 및 전지훈련 유치로 지역경제 활성화에 기여

31. 반다비 체육센터 건립사업

❖ 장애인들의 스포츠 참여에 대한 관심과 수요가 지속적으로 증가하고 있어 장애인들의 스포츠 활동에 특화된 체육시설 확충 필요

□ 추진방향

❍ 스포츠복지 사각지대 계층에 대한 체육복지 확대

❍ 장애인의 우선 이용을 보장하고 비장애인도 함께 이용할 수 있는 생활밀착형 공간 마련

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2026 ~ 2029년

❍ 위    치: 금서면 매촌리 67번지 일원

❍ 사 업 량: 반다비 체육센터 (지하1층~지상2층, 연면적:2,300㎡)

❍ 사 업 비: 9,000백만원(국비 5,000, 군비 4,000)

❍ 사업내용: 수영장, 체력단련실, 소규모체육관, 운동처방실 등

□ 그간 추진사항

❍ 기본구상 및 타당성조사 용역	: 2025. 4. ~ 10월

❍ 장애인체육회 등 간담회	: 2025. 9월

❍ 공유재산관리계획 수립	: 2025. 10월

❍ 국민체육센터(장애인형) 공모 신청	: 2025. 10월

□ 추진계획

❍ 지방재정투자사업 심사 의뢰	: 2026.  1월

❍ 설계공모 및 실시설계용역 시행	: 2026.  2월

❍ 공사 착공 및 준공	: 2027. 1월 ~ 2029. 12월

□ 기대효과

❍ 장애인의 문화생활 향유, 건강 증진, 사회 참여기회 확대

❍ 장애인과 비장애인들 간 교류 활성화를 통한 소통의 장 마련

32. 주민주도형 관광활성화 지원사업

❖ 관광의 기획 및 운영에 주민들의 창의적인 참여를 유도하여

지속가능한 관광 추진 및 지역사회 활력 제고

□ 추진방향

❍ 지역의 자원과 관광산업을 재해석하여 관광콘텐츠로 실험하고,  정착 가능하도록 지원

❍ 민․관 협업체계를 구축하고 지역 주민 주도의 지역관광 육성

□ 사업개요

❍ 위    치: 산청군 주요관광지

❍ 사 업 비: 550백만원(국비 250, 기금 50, 군비 250)

❍ 사업내용

- 산청관광 활성화 공모사업 「산청이음」: 지역자원을 관광콘텐츠로 재해석 할 수 있는 소규모 실험 및 컨설팅 지원

- 권역형 지역관광추진조직(DMO) 공모사업: 지역관광 중간지원 및 사업실행 조직 육성․지원

□ 그간 추진사항

❍ 산청관광 활성화 공모사업 시범추진           : 2025. 7. ~ 11월

❍ 권역형 지역관광추진조직(DMO) 공모사업 신청 : 2025. 9월

□ 추진계획

❍ 산청관광 활성화 공모사업 계획 수립         : 2026.  1. ~  2월

❍ 산청관광 활성화 공모사업 추진              : 2026.  3. ~ 11월

□ 기대효과

❍ 지역 내 우수한 관광자원 발굴 및 활용 가능성 제고

❍ 지역 내 민․관 협력을 통한 지역이 스스로 자생할 수 있는 지속  가능한 관광생태계 구축

33. 웰니스 광역 시티투어 운영

❖ 우리 군만의 차별화되고 특색있는 체류형 관광상품 개발을 통해       생활인구 활성화로 인한 정주 인구 증대 및 관광활성화 도모

□ 추진방향

❍ 지역 관광자원을 연계한 특색있는 체류형 관광상품 개발을 통해 외부 관광객 방문 유도

❍ 지속적인 여행 수요 창출을 통한 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2026. 2. ~ 12월

❍ 위    치: 동의보감촌, 남사예담촌 등 주요 관광지, 체험 농가 등

❍ 사업대상: 수도권 관광객

❍ 사 업 비: 100백만원(군비)

❍ 사업내용: 산청군 특화 웰니스 여행 프로그램 개발(당일, 1박2일,  맛기행, 지리산권 여행 등) 관광 수요 타깃층에 따른  맞춤형 상품 운영 및 홍보

□ 그간 추진사항

❍ 웰니스 광역시티투어 콘텐츠 개발 및 제작     : 2025. 2. ~  5월

❍ 웰니스 광역시티투어 홍보 및 운영            : 2025. 4. ~ 11월

□ 추진계획

❍ 웰니스 광역시티투어 운영 기본계획 수립      : 2026. 2월

❍ 웰니스 광역시티투어 신규 콘텐츠 개발 및 운영     : 2026. 4. ~ 11월

□ 기대효과

❍ 웰니스 전문관광지로서의 완성도 높은 산청만의 체계적인 여행 프로그램 개발을 통한 관광지 브랜드 확보 및 체류형 관광 활성화

34. 관광캐릭터「산 너머 친구들」굿즈샵 운영

❖ 관광캐릭터 굿즈샵 운영으로 굿즈 상품화를 통한 지역경제 활성화 및 관광홍보 거점 마련 및 관광브랜드 강화

□ 추진방향

❍ 우리군 대표 관광지인 동의보감촌에 캐릭터 굿즈샵 운영으로 관광객   들에게 관광안내 및 새로운 볼거리 제공으로 방문객 체류시간 연장

❍ 굿즈 제작 및 판매를 통한 지역 소상공인 참여 확대 및 지역경제    파급 효과 창출

□ 사업개요

❍ 위    치: 동의보감촌 불로문 앞(금서면 특리 1300-31)

❍ 사 업 량: 굿즈샵 운영 및 관광홍보관 운영

❍ 사 업 비: 100백만원(군비)

❍ 사업내용: 산 너머 친구들 굿즈 판매 및 산청관광 홍보관 운영

※ 굿즈 종류: 약 20종(인형, 키링, 티셔츠, 노트 등)

□ 그간 추진사항

❍ 굿즈샵 디자인 기획 및 실시설계 용역        : 2025.  7. ~  8월

❍ 굿즈샵 설치 공사 시행                      : 2025. 10. ~ 12월

□ 추진계획

❍ 굿즈샵 개장 및 운영                         : 2026.  1월 ~ 계속

□ 기대효과

❍ 관광캐릭터 굿즈샵을 통한 방문객 유입 등 관광객 유치 확대

❍ 관광브랜드 가치 제고 연계 소비 확대를 통한 지역경제 활성화

35. 남사예담촌 인프라 구축사업

❖ 남사예담촌의 부족한 시설 추가 구축으로 방문객 편의 제고 및      체류형 관광기반 조성

□ 추진방향

❍ 전통한옥 마을의 정취와 경관에 어울리도록 기반시설 인프라 구축

❍ 전통한옥을 테마로 한 체험거리 조성 및 관광객 불편시설 정비

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022 ~ 2026년

❍ 위    치: 산청군 단성면 남사리 1373번지 일원

❍ 사 업 량: 남사예담촌 인프라 구축사업 1식

❍ 사 업 비: 4,270백만원(균특 3,500, 군비 770)

❍ 사업내용

- 마을 순환도로 및 주차장 진입도로 확포장 L=700m, B=8~10m

- 한옥테마 및 꽃공원조성, 휴게쉼터 등 A=3,000㎡

- 산책로 및 테크로드 조성 L=300m

□ 그간 추진사항

❍ 지역개발계획 변경 승인	: 2021. 12월

❍ 2023년 지역개발계획사업비 신청 및 확정	: 2022.  4. ~ 9월

❍ 편입부지(국유지)보상 완료	: 2022.  9월

❍ 공유재산 심의 및 관리계획 수립	: 2022. 10월

❍ 편입부지 보상협의	: 2022. 10. ~ 2025. 12월

❍ 공사 착공	: 2024.  6월

□ 추진계획

❍ 남사예담촌 인프라구축사업 준공	: 2026. 12월

□ 기대효과

❍ 남사예담촌 환경정비 및 관광인프라 구축으로 관광객 유입 증대

36. 백두대간 V-힐링 스타트업로드 조성사업

❖ 지리산으로 가는 대표적 관문이며 가을철 단풍길로 유명한 밤머리재

터널 개통으로 기존도로와 유휴공간을 활용하여 생태문화체험공간 등

지리산 생태관광 거점 조성

*“V”: Varied(다양한)의 약자로 다양한 백두대간의 힐링 체험의 시작을 의미

□ 추진방향

❍ 새로운 탐방로(웅석봉~지리산 성삼재) 개설에 앞선 탐방안내 및 생태체험공간 조성

❍ 기존 도로의 단풍길을 명품화한 관광테마로드 조성

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2023 ~ 2027년(5년간)

❍ 위    치: 산청군 금서면 평촌리~삼장면 홍계리 일원

❍ 사 업 량: 백두대간 V-힐링 스타트업로드 조성 L=10.0km

❍ 사 업 비: 15,000백만원(균특 7,500 도비 2,250 군비 5,250)

❍ 사업내용: 백두대간 V-힐링스타트업센터 건립, 밤머리재 단풍길 조성, 자전거도로 노선 확충 및 편의시설 설치

□ 그간 추진사항

❍ 백두대간 V-힐링 스타트업로드 타당성조사 용역(B/C1.14)	: 2020.  3월

❍ 백두대간권 발전종합계획(변경) 핵심사업 선정	: 2021.  5월

❍ 백두대간권 발전종합계획(변경) 결정․고시	: 2021. 11월

❍ 2023년 해안 및 내륙권 발전사업 국비 신청	: 2022.  4월

❍ 재정투자심사(도) 조건부 승인	: 2022.  5월

❍ 기본 및 실시설계용역 착수	: 2024.  1월

❍ 밤머리재 명품로드 조성사업 착공	: 2025.  1월

□ 추진계획

❍ 밤머리재 명품로드 조성사업 준공	: 2026. 12월

❍ 전체 사업 준공	: 2027. 12월

□ 기대효과

❍ 국도 59호선 기존 도로를 관광형 테마 도로로 조성하여 인근 지역   관광 활성화로 지역경제 활성화 기대

37. 밤머리재 전망대 관광경관 명소화 사업

❖ 웅석봉 군립공원과 지리산 국립공원 권역을 연결하는 국도 59호선에      위치한 웅석봉 등산코스의 대표적인 들머리 지점에 천혜의 자연을      활용하여 관광경관 명소로 조성

□ 추진방향

❍ 지리산과 웅석봉의 등산객 상춘객 및 단풍철 드라이브를 즐기는   관광객들을 위한 여행거점으로의 기능 수행

❍ 계곡과, 산촌 경관 등 산청군의 다양한 경관을 감상 할 수 있는   완곡부에 전망대를 통해 연속적인 경관을 감상할 수 있는 공간 조성

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2024 ~ 2027년(4년간)

❍ 위    치: 산청군 삼장면 홍계리 산110-3번지 일원

❍ 사 업 량: 밤머리재 전망대 조성 A=4,992㎡

❍ 사 업 비: 12,484백만원(국비 6,242, 도비 1,872.6, 군비 4,369.4)

❍ 사업내용: 방문자센터, 구름테라스, 단풍주차장, 전망대 등 조성

□ 그간 추진사항

❍ 남부권 광역관광개발사업 계획 수립 반영	: 2022. 11월

❍ 남부권 광역관광개발사업 예산 확정 통보(문체부)	: 2023. 12월

❍ 지방재정투자심사 승인(조건부 2단계)	: 2024.  4월

❍ 기본 및 실시설계용역 착수	: 2024. 12월

❍ 밤머리재 전망대 단풍주차장 조성공사 착공	: 2025.  9월

□ 추진계획

❍ 밤머리재 구름테라스 조성사업 준공	: 2026. 12월

❍ 전체 공사 준공	: 2027. 12월

□ 기대효과

❍ 산청 북부지역 동의보감촌과 남부지역 지리산, 남사예담촌 등 주요   관광지간 연결 허브 역할을 수행함으로써 지역 관광산업 활성화

38. 백두대간 생태축 복원사업

❖ 지리산과 웅석봉 군립공원을 연결하는 백두대간 생태축의 복원을 통해 생물 다양성 증진 및 민족의 정기성 회복에 기여

□ 추진방향

❍ 훼손 산림의 지역적·역사적 특성을 고려하여 복원방향 설정

❍ 장기적인 관점에서 생태계 및 생물종 관점에서의 사업 추진

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2023 ~ 2026년

❍ 위    치: 삼장면 홍계리 산110-3번지 밤머리재 일원

❍ 사 업 량: 백두대간 생태축 복원사업 1식

❍ 사 업 비: 5,810백만원(국비 4,067, 도비 523, 군비 1,220)

❍ 사업내용: 구조물설치 1개소(B=14m, L=50m, H=9.4m), 식생기반토 성토, 자생식물 식재(교목, 관목, 초본류 등)

□ 그간 추진사항

❍ 시공단계의 건설사업 관리계획 승인	: 2023.  3월

❍ 시공업체 계약 체결                              : 2023.  4월

❍ 1차분 건설사업 관리용역(책임감리) 계약 체결	: 2023. 11월

❍ 설계변경(총괄분 1회, 1차분 1회)	: 2024. 11월

❍ 1차분 공사 준공	: 2024. 11월

❍ 2차분 공사 발주	: 2024. 11월

❍ 2차분 건설사업 관리용역(책임감리) 계약 체결     : 2025.  6월

❍ 3차분 공사 계약	: 2025. 11월

❍ 설계변경(총괄분 및 2차)                          : 2025. 12월

❍ 2차분 건설사업 관리용역(책임감리) 준공	: 2025. 12월

❍ 동절기 공사 중단                                : 2025. 12월

□ 추진계획

❍ 전기공사 준공 예정	: 2026.  3월

❍ 2차분 및 3차분 시공 준공 예정                   : 2026.  5월

□ 기대효과

❍ 지리산과 웅석봉의 생태계 연계성 회복 및 산림복원 성공모델 제시

39. 창촌 국민여가캠핑장 조성사업

❖ 덕천강과 폐천부지를 활용한 생태공원에 쾌적하고 안전한 국민여가

캠핑장을 조성

❖ 주민 정주여건 개선과 가족단위 여가 활동 지원 및 국민 관광복지 실현

□ 추진방향

❍ 기존의 창촌 수변공원에 국민여가 캠핑장을 조성함으로써 지역

생활환경 개선 및 지역소득 증가를 도모하고 산청을 찾는 관광       (캠핑)객들에게 자연과 어우러진 여가공간 및 휴식공간 제공

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2026 ~ 2027년(2년간)

❍ 위    치: 산청군 단성면 창촌리 834-25번지 일원

❍ 사 업 량: 국민여가캠핑장 조성 1식

❍ 사 업 비: 3,000백만원(국(전환) 1,500, 도비 450, 군비 1,050)

❍ 사업내용: 캠핑장 부지조성, 관리동 신축, 주차장 조성 등

□ 그간 추진사항

❍ 실시설계 및 기본 설계 용역 착수                : 2025.  9월

□ 추진계획

❍ 공원 BF용역 발주                               : 2026.  2월

❍ 공사 착공	: 2026. 10월

❍ 공사 준공 및 민간위탁자 모집	: 2027. 12월

□ 기대효과

❍ 지역 주민의 정주여건 개선과 관광객에게 쾌적한 환경 제공

❍ 창촌수변공원을 정비하여 지역주민의 일자리 및 지역소득 창출

.